국민과 함께 행복을 열어가는 국토안전 지킴이			안전 베테랑은
			현장정리부터

소규모 안전관리계획서 작성 예시

2021. 8.

	국토안전관리원

	목 차

Ⅰ. 소규모 건설공사 안전관리계획서 업무 개요	1

Ⅱ. 소규모 안전관리계획서 적용 범위	3

Ⅲ. 소규모 안전관리계획서 수립기준	7

Ⅳ. 소규모 안전관리계획서 예시	8

1. 공사개요	8

가. 위치도	8

나. 공사개요	9

다. 예정공정표	10

라. 설계도서	11

2. 비계설치계획	21

가. 가설비계의 설치계획	21

나. 비계의 설치도면	22

다. 비계의 시공절차 및 주의사항	30

3. 안전시설물 설치계획	39

가. 개구부 안전시설물 설치계획	39

나. 각층 단부 안전난간 설치계획	40

다. 계단 안전난간 설치계획	41

라. E/V PIT 벽면 개구부, 내부 작업발판 설치계획	42

마. 안전시설물 설치도면	43

Ⅰ		소규모 건설공사 안전관리계획서 업무 개요

소규모 안전관리계획서	업무 개요

▢ 건설기술 진흥법

		국토안전관리원

제62조의2(소규모 건설공사의 안전관리) ① 건설사업자와 주택건설등록업자는 제62조제1항에 따른 안전관리계획의 수립 대상*이 아닌 건설공사 중 건설사고가 발생할 위험이 있는 공종이 포함된 경우 그 건설공사를 착공하기 전에 시공 절차 및 주의사항 등 안전관리에 대한 계획(이하 “소규모안전관리계획”이라 한다)을 수립하고, 이를 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인ㆍ허가기관의 장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 소규모안전관리계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따라 소규모안전관리계획을 제출받은 발주자는 소규모 안전관리계획의 내용을 검토하여 그 결과를 건설사업자와 주택건설등록업자에게 통보하여야 한다.

③ 소규모안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 범위, 소규모안전관리계획의 수립 기준, 제출ㆍ승인의 방법 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2020. 6. 9.]

부칙<제17441호, 2020.6.9.>제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(소규모 건설공사의 안전관리 등에 관한 적용례) 제62조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 입찰공고(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 건설공사의 허가ㆍ인가ㆍ승인 등을 말한다)하는 건설공사부터 적용한다.

* 첨부1.안전관리계획 수립 대상 건설공사 참조

▢ 건설기술 진흥법 시행령

제101조의5(소규모 건설공사 안전관리계획의 수립 등)  ② 법 제62조의2제  1항에 따라 소규모안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장은 그 내용을 검토하여 소규모안전관리계획을 제출받은 날부터 15일 이내에 해당 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 그 결과를 통보해야 한다. 이 경우 검토 결과는 적정, 조건부 적정, 부적정으로 구분한다.

③ 제2항 후단에 따른 검토 결과 구분의 기준, 승인 절차 및 부적정 판정을 받은 경우 필요한 조치에 관하여는 제98조제5항 및 제6항을 준용한다. 이 경우 제98조제5항 및 제6항 중 “안전관리계획”은 “소규모안전관리계획”으로, 제98조제6항 중 “안전관리계획서”는 “소규모안전관리계획서”로 본다. [본조신설 2020. 12. 8.]

부칙 <제31245호, 2020. 12. 8.>  제1조(시행일) 이 영은 2020년 12월 10일부터 시행한다.

* 제98조(안전관리계획의 수립)

⑤ 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장은 제3항에 따른 안전관리계획의 검토 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정한 후 제1호 및 제2호의 경우에는 승인서(제2호의 경우에는 보완이 필요한 사유를 포함해야 한다)를 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 발급해야 한다. <개정 2016. 1. 12., 2019. 6. 25., 2020. 1. 7.>

1. 적정 : 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때

2. 조건부 적정 : 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때

3. 부적정 : 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

⑥ 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장은 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 제5항제3호에 따른 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 해야 한다.

▢ 업무절차도

건설사업자/주택건설등록업자		발주청/인허가기관
안전관리계획서 작성 및 제출		안전관리계획서 검토
건설공사 착공		안전관리계획서 검토결과 통보* (적정, 조건부 적정, 부적정) * 제출받은 날부터 15일 이내
(부적정시) 안전관리계획서 보완 및 제출		안전관리계획서 재검토
건설공사 착공		안전관리계획서 재검토 결과 통보

Ⅱ		소규모 안전관리계획서 적용 범위

소규모 건설공사의 안전관리	현장점검 주요업무

▢ 건설기술 진흥법 시행령

제101조의5(소규모 건설공사 안전관리계획의 수립 등) ① 법 제62조의2제1항 전단에 따른 소규모안전관리계획(이하 “소규모안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물*의 건설공사**로서 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사로 한다.

* “건축물”이란 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소ㆍ공연장ㆍ점포ㆍ차고ㆍ창고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

** “건설공사”란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치ㆍ유지ㆍ보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사는 포함하지 아니한다.

가. 「전기공사업법」에 따른 전기공사  나. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사

다. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사  라. 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사

1. 연면적 1,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택*

소규모 안전관리계획서	적용 범위

* 건축법 시행령 [별표 1] 제2호

2. 공동주택[공동주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터ㆍ공동육아나눔터ㆍ작은도서관·노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 및 「주택법 시행령」 제10조제1항제1호에 따른 원룸형 주택을 포함한다]. 다만, 가목이나 나목에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다목에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외하며, 가목부터 라목까지의 규정에서 층수를 산정할 때 지하층을 주택의 층수에서 제외한다.

가. 아파트: 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

나. 연립주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택

다. 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)

라. 기숙사: 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 1개 동의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체의 50퍼센트 이상인 것(「교육기본법」 제27조제2항에 따른 학생복지주택 및 「공공주택 특별법」 제2조제1호의3에 따른 공공매입임대주택 중 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것을 포함한다)

2. 연면적 1,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 및 제4호의 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설*

* 건축법 시행령 [별표 1] 제3호 및 제4호

3. 제1종 근린생활시설

가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것

나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것

다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설(세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)

라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설

마. 탁구장, 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것

사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설

자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30제곱미터 미만인 것

차. 전기자동차 충전소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것으로 한정한다)

4. 제2종 근린생활시설

가. 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

나. 종교집회장[교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실(祭室), 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

다. 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것

라. 서점(제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것)

마. 총포판매소

바. 사진관, 표구점

사. 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 가상현실체험 제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 및 체험 관련 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

아. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것

자. 일반음식점

차. 장의사, 동물병원, 동물미용실, 「동물보호법」 제32조제1항제6호에 따른 동물위탁관리업을 위한 시설, 그 밖에 이와 유사한 것

카. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

타. 독서실, 기원

파. 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설(「관광진흥법」에 따른 기타유원시설업의 시설을 말한다. 이하 같다) 등 주민의 체육 활동을 위한 시설(제3호마목의 시설은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

하. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)

거. 다중생활시설(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 국토교통부장관이 고시하는 기준과 그 기준에 위배되지 않는 범위에서 적정한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것

1) 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것

2) 「물환경보전법」 제33조제1항 본문에 따라 폐수배출시설의 설치 허가를 받거나 신고해야 하는 시설로서 발생되는 폐수를 전량 위탁처리하는 것

더. 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150제곱미터 미만인 것

러. 안마시술소, 노래연습장

3. 연면적 1,000제곱미터 이상(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제14호*에 따른 산업단지에서 공장을 건축하는 경우에는 2,000제곱미터 이상으로 한다)인 「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장**

* 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제14호

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

14. “산업단지”란 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조ㆍ제7조ㆍ제7조의2 및 제8조에 따라 지정ㆍ개발된 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지를 말한다.

** 건축법 시행령 [별표 1] 제17호

17. 공장

물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것

4. 연면적 5,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제8호가목의 창고

** 건축법 시행령 [별표 1] 제8호

8. 운수시설

가. 여객자동차터미널

** 건축법 시행령 [별표 1] 제18호

18. 창고시설(위험물 저장 및 처리 시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외한다)

가. 창고(물품저장시설로서 「물류정책기본법」에 따른 일반창고와 냉장 및 냉동 창고를 포함한다)

Ⅲ		소규모 안전관리계획서 수립기준

소규모 안전관리계획서	수립 기준

▢ 건설기술 진흥법 시행령

제59조의2(소규모안전관리계획의 수립기준) 법 제62조의2제1항에 따른 소규모안전관리계획(이하 “소규모안전관리계획”이라 한다)의 수립기준은 별표 7의2와 같다.

[본조신설 2020. 12. 14.]

부칙  <제792호, 2020. 12. 14.>  제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

ㅇ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7의2]

1		건설공사의 개 요		공사 전반을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서 (해당 공사를 인가ㆍ허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)
2		비 계 설치계획		건축물 외부에 설치하는 비계의 설치계획 및 시공도면과 현장 특성을 반영한 비계 시공절차 및 주의사항
3		안전시설물 설치계획		추락방호망, 낙하물방지망, 개구부 덮개, 안전난간대 등 안전시설물 설치계획과 안전시설물을 적정하게 설치하기 위한 사진ㆍ그림 등 예시자료

Ⅳ		소규모 안전관리계획서 예시

1. 공사 개요

소규모 안전관리계획서	계획서 예시

가. 위치도

- (검토내용) 공사현장의 정확한 위치와 주변상황 확인

※ 경우에 따라서 현장 주변의 최근 사진 등을 첨부하여 작성·확인할 수 있음.

나. 공사개요

공사 개요서
공 사 명		OOO OOOO 신축공사
공사현장 주소			전 화 번 호
공 사 기 간			공 사 금 액 (부가세 포함))
발주자	명칭(상 호)		전 화 번 호
	성명(대표자)		등 록 번 호
	주 소
설계자	명칭(상 호)		전 화번 호
	성명(대표자)		등 록 번 호
	주 소
감리자	명칭(상 호)		전 화 번 호
	성명(대표자)		등 록 번 호
	주 소
시공자	명칭(상 호)		전 화 번 호
	성명(대표자)		등 록 번 호
	주 소
소규모 안전관리 수립대상의 종류		ex) 지상5층 건축물의 건설공사, 제1종 근린생활시설, 연면적 1,500㎡
공 사 개 요		- 대지면적 : OOO ㎡ - 층 수 : 지상 O층, 지하 O층 - 구조형태 : 철근콘크리트 구조 (RC조) - 건축면적 : OOO.OO ㎡ - 연 면 적 : OOO.OO ㎡ - 최고높이 : OO.OO m - 용 도 : 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설
굴 착 공 사		- 굴착깊이 : 0.0m - 흙막이벽체공법 : C.I.P 공법, 지하연속벽, H-pile+토류판+버팀대 - 굴착공법 : 오픈 컷

- (검토내용) 공사기간 및 공사개요와 용도, 연면적 등 공사규모 확인(소규모 안전관리계획서 작성대상 확인 등)

다. 예정공정표

- (검토내용) 예정공정표를 통하여 비계, 추락방지시설 등 안전시설물 설치·해체 시점 및 전체 공정의 흐름이나 각 공종의 전․후관계 및 기간 등 확인

라. 설계도서

- (검토내용) 대상건설공사의 현황, 안전관리계획 및 소규모 안전관리계획 수립대상 건설공사, 비계 및 안전시설물 설치대상 등 확인

2. 비계 설치계획

가. 가설비계의 설치계획

▣ 작업개요
1. 외부에 설치하는 자재 반입시 즉시 설치가 이루어지며 강관비계 설치 ① 비계재료 : 강관파이프, 클램프 등 2. 상부층에서 낙하물 발생시 이를 차단하기 위하여 10m이내 높이 마다 낙하물방지망 설치 ① 설치방법 : 와이어로프 + 낙하물방지망 ② 설치위치(1단) : 지상3층 3. 작업순서 자재 운반 ⇒ 강관비계 설치 ⇒ 낙하물방지망 설치 ⇒ 강관비계 및 낙하물방지망 해체 ⇒ 자재반출
▣ 작업계획
작업 기간	⦁작업기간 : 2021. 06 ~ 2021. 09
작업인원(일)	⦁작업인원 : 7 명
주요 공법	⦁낙하물방지망 : 클램프, 와이어로프지지 방법
사용기계·기구	⦁이동식크레인, 근로자 개인 소도구 등
안전 설비	⦁안전대 부착설비, 작업발판 설치
개인보호구	⦁안전모, 안전대 부착설비 + 안전대, 안전화 등
특별 사항	⦁작업전 특별안전교육 실시

나. 강관비계의 설치도면

외부비계 설치 단면도-1

기둥의 간격 띠장 방향 1.5m

기둥의 간격 장선 방향 0.8m

띠장 간격은 1.5m로 설치

장선 간격은 1.5m로 설치

작업발판은 유공발판 사용

외부비계 설치 단면도-2

기둥의 간격 띠장 방향 1.5m

기둥의 간격 장선 방향 0.8m

띠장 간격은 1.5m로 설치

장선 간격은 1.5m로 설치

작업발판은 유공발판 사용

강관비계 상세도(입면도)
	(1) 수직재 : D48.6×2.3t(STK500) @500(장선방향)×1,800띠장방향 (2) 장 선 : D48.6×2.3t(STK500), @1,800띠장방향 (3) 띠 장 : D48.6×2.3t(STK500), @1,500 (4) 작업발판 : 1,800×400, @1,800띠장방향 (5) 밑둥잡이 : D48.6×2.3t(STK500) (6) 외부난간 : D48.6×2.3t(STK500) @600(장선방향)×1,800띠장방향 (7) 벽이음재 (8) 내부난간 : D48.6×2.3t(STK500) @600(장선방향)×1,800띠장방향 (9) 추락방호망 : 안전난간의 설치가 곤란한 곳에 설치 (10) 발끝막이판 : H=10mm이상

비계설치 평면도

외부비계 설치 단면도-1

낙하물방지망 설치 평면도

낙하물방지망 상세도

다. 비계의 시공절차 및 주의사항

1) 가설비계 설치 시 안전대책

① 가설비계 설치방법

구 분	내 용
재 료	강관 및 부속철물은 한국산업표준, 방호장치 안전인증 기준, 방호장치 자율안전기준에 합격한 제품을 사용한다. 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등 변형이 없는 것을 사용한다.
연결방법	비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위해 밑받침 철물 및 깔판, 깔목 등을 사용하여 밑둥잡이를 설치한다. 각륜을 설치한 이동식 비계는 불의의 이동을 방지하기 위해 브레이크, 쐐기 등으로 각륜을 고정시키고 비계의 일부를 견고한 건설물에 잡아매어 이동을 방지한다. 강관의 접속부 또는 교차부는 고정 클램프를 사용하여 견고히 묶는다. 교차 가새로 측면을 보강한다. 외줄비계, 쌍줄비계 또는 교차부는 고정 클램프를 사용하여 견고히 묶는다. 교차가새로 측면을 보강한다. 외줄비계, 쌍줄비계 또는 돌출비계는 다음 각 항목의 정하는 바에 따라 벽이음 또는 버팀을 설치한다. 강관비계의 종류에 따라 조립간격은 기준에 적합할 것. 강관 재료를 사용하여 견고한 것으로 할 것.
취급 및 보관 주의사항	강관의 운반이나 높은 곳에 오르내릴 때에는 변형, 탈락, 손상 등이 일어나지 않도록 주의하며, 던지거나 투하하는 행동은 삼간다. 부속품 및 도구는 적당한 용기를 사용하여 운반하며 부식, 파손을 방지한다. (달포대 사용) 해체 작업에서 연결부분을 풀 때는 1개소만 먼저 풀고 일부는 강관에 붙은대로 해체하여 피해를 방지한다. 해체한 재료는 될 수 있는 한 고임목 및 천막을 덮어 보관하여 부식을 방지한다. 해체 후에는 반드시 재료의 점검을 실시하여 변형이나 파손된 것은 즉시 보수하고 도장이 벗겨진 것은 손질을 하여 보관한다. 보관 장소는 습기가 없는 곳을 택하고 흙이나 젖은 바닥위에 직접 놓지 않는다. 강관을 세워 보관 할 때에는 틀을 사용하거나 서로 묶어 쓰러지지 않도록 한다. 보관할 때에는 길이별, 재질별, 부속철물별로 분류하여 정리 보관한다. 쌓은 높이를 1.5m이하로 하여 무너지지 않도록 쐐기 및 버팀재를 설치한다.

② 가설비계 설치순서

운반	→	최하단 브래킷 또는 깔판설치	→	수직 세우기	→	클램프 조임
지게차 운반 자재결속철저 크레인 양중 소형자재는 인양 BOX 또는 달포대 사용		브라켓은 발코니용, 슬라브형 TYPE에 적합한 브라켓 사용 비계기둥의 밑둥에 받침철물사용 비계기둥과 밑둥잡이로 연결 깔판은 장기 하중에 견딜 수 있는 양호한 재료 사용		수평 길이를 감안하여 적정 간격을 준수 비계기둥간격 배치기준 준수 (띠장방향 1.5m이상 1.8m이하, 장선방향 1.5m 이하 수직도 준수 하부 경사버팀대 설치		해체작업을 고려하여 조임 정도를 너무 약하게 하는 행 위 절대금지
						↓
수평 세우기	←	수직 세우기 하부 핀연결	←	클램프 조임	←	수평 세우기
핀 이음부의 정착 확인 철저 코너구간에 대한 치수부족 등의 이유로 구간 생략하는 행위 금지		핀 이음부의 정착 확인		해체작업을 고려하여 조임 정도를 너무 약하게 하는 행위 절대금지		핀이음부의 정착 확인 철저 코너구간에 대한 치수 부족 등의 이유로 구간 생략하는 행위 금지
↓
벽이음재 설 치	→	확인 및 종료
수직수평 5M 이내 간격을 기준 거푸집 설치층에는 임시보강을 인장재(철선)과 압축재(각재)를 이용하여 유동 방지조치를 취할 것		각 코너부 조인트누락여부 클램프 체결 누락여부 벽이음 및 최상단 임시 보강상태 비계상의 잔여 자재여부 작업중 발생한 위험상황이나 불안전한 작업방법에 대한 작업 지휘자의 개선 방안 지시

③ 가설비계 해체순서

작업준비	→	최상단이음재 해 체	→	수평재 해체	→	수직재 해체
작업자 숙련정도에 따른 적정배치 각 개인별 건강상태 작업자 및 통제자에 대한 특별교육실시		비계상에 자재나 공구 등의 적치 여부 확인 및 제거 벽이음재의 무리한 해체 금지		무리한 힘으로 인해 몸의 중심을 잃지 않도록 주의 무단 투하 금지 수평재 분리시 핀의 낙하예방에 주의를 기할것		무리한 힘으로 인해 몸의 중심을 잃지 않도록 주의 무단 투하 금지
						↓
하부구간이동	←	수평재, 수직재 해 체	←	벽이음재 해체	←	하부구간이동
옆구간의 작업자와 동일한 작업 진행 실시		무리한 힘으로 인해 몸의 중심을 잃지 않도록 주의 무단 투하 금지		벽이음재의 무리한 과해체 금지 벽이음 해체전 보강 실시		옆구간의 작업자와 동일한 작업진행 실시 미숙련공과 숙련공의 작업진행속도가 맞지 않는 경우 미숙련공의 심리적 압박으로 서두르는 현상발생 (적정배치사항)
↓
반 복	→	확인 및 종료
		구조물 단부 또는 경사 부위에 잔여 자재여부 확인 작업중 발생한 위험 상황이나 불안전한 작업 방법에 대한 작업지휘자의 개선방안 지시

④ 비계 조립 작업시 위험요인 및 안전대책

작업 절차	위험 요인	안 전 작 업 방 법
운반,준비	양중기, 차량계 기계 협착, 충돌, 전도 및 낙하물 위험 작업방법 미숙자 무리한 작업 진행	차량계 건설기계 유도신호수 배치 개인보호구 지급 및 착용 특별교육* 실시(2시간) 및 관리감독자 배치 단관파이프 및 부속철물은 검정품 사용 양중기 인양하중 준수, 인양범위내 출입통제 양중기 인양방법 준수 적정한 작업인원 배치 * 비계의 조립·해체 또는 변경작업(2시간), 1톤 이상 크레인을 사용하는 작업(2시간)
.밑받침 재료 설치	비계 기초 부실로 인한 붕괴, 전도위험 상하 동시작업으로 낙하물 위험	밑 받침철물 사용 지반다짐 및 깔판, 깔목 설치 상하동시 작업 금지 밑둥잡이 설치
브래킷 설치	미검정품 사용 및 구조물에 고정 불량으로 붕괴, 도괴위험	검정품 여부 및 고정철물 상태 확인 브래킷이 움직이지 않도록 견고히 조임 고임목을 설치하여 충격흡수 수평 설치간격 준수(1.5-1.8m)
수직 세우기	보호구 미착용 추락 출입금지 조치 미흡으로 낙하물 위험 설치간격 미준수로 인한 추락,	악천후시 작업중지 및 상하 동시작업 금지 작업반경 내 관계근로자외 출입금지 관리감독자(작업지휘자)배치 비계기둥 간격 준수 (띠장방향1.5-1.8m, 장선방향 1.5m 이하) 안전대 착용
수평 세우기	비계전도 및 근로자 추락위험	장선간격 1.5m 이하 띠장 수직간격 1.5m 이하, 지상으로부터 첫 번째 띠장 2m이내 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속 안전대 착용
클립조립	연결 불량으로 전도 붕괴, 추락위험	비계간의 연결은 전용철물(검정품)사용, 철선 등 사용금지 전용철물이 풀리지 않도록 견고히 고정
수직 세우기 하부클립조립	비계의 변형, 이탈, 침하 도괴 위험	작업층의 외부비계는 밖으로 처지지 않오록 철선 와이어 등을 이용하여 고정 비계상 가설재 과다 적지 금지 (비계기둥간 적재하중 400kg 이내) 가새는 기둥간격 10m마다 45도 각도로 걸쳐대고 비계기둥 및 띠장에 결속
벽이음 설치	비계의 변형, 이탈, 침하 도괴 위험	수직 5m, 수평 5m 이내 간격으로 설치 브라켓 설치 및 전용철물로 고정 외부 마감작업시에는 구조물 내부에서 써포트를 설치하고 단과 파이프로 벽이음 보강 후 브라켓 벽이음 해체

⑤ 비계 등 자재 인양시 안전대책

구 분	내 용	비 고
자재 결속 불량으로 인한 낙하예방	인양 예정인 단관파이프는 동일한 규격으로 묶음처리를 하여 인양 인양 예정인 단관파이프는 달기로프에 결속하기 전에 1차 철선으로 묶음 처리를 하여 이탈이 없도록 조치 초기 인양과정에서의 협착을 예방하기 위하여 하부에는 깔목을 설치하여 공간을 남겨두도록 함
신호불일치로 인한 협착, 낙하예방	신호자 선정：신호자는 무전기 사용 경험이 많은 숙련공으로 선정 (작업반장급 이상) 신호 체계 수립：운전자와 신호자는 무전기 신호를 원칙으로 하여 상호 체널 확인, 감도 확인, 전달언어 등을 확인한 후 작업실시 관리감독자 배치：자재 인양 작업시에는 당해 작업의 관리감독자(협력업체 직원 또는 원청 담당 직원)가 참여하여 안전 작업 이행여부를 확인하고 작업 양중능력 및 장비전도예방 조치：작업 전 인양물의 최대 하중을 검토하고 크레인의 작업 반경에 따른 능력을 사전 확인하고 기타 전도예방을 위한 아웃트리거 설치 및 지반상태 확인 등을 실시

⑥ 비계 등의 조립‧해체 및 변경

달비계 또는 높이 5미터 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업을 하는 경우 다음의 사항을 준수한다.

근로자가 관리감독자의 지휘에 따라 작업

조립·해체 또는 변경의 시기·범위 및 절차를 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지

조립·해체 또는 변경 작업구역에는 해당 작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시

비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지

비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우에는 폭 20cm이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 착용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치 실시

재료·기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자가 달줄 또는 달포대 등을 사용하도록 조치

⑦ 비계의 점검 및 보수

비, 눈, 그 밖의 기상상태의 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립·해체하거나 변경한 후에 그 비계에서 작업을 하는 경우 해당 작업 시작 전에 다음사항을 점검하고 이상 발견 즉시 보수조치

발판재료의 손상여부 및 부착 또는 걸림상태	비계의 연결부 또는 접속부의 풀림상태	연결재료 및 연결철물의 손상 또는 부식상태
손잡이의 탈락유무	기둥의 참하, 변형, 변위 또는 흔들림 상태	로프의 부착상태 및 매단 장치의 흔들림 상태

⑧ 비계 해체 작업시 안전대책

안전작업절차	작업내용	안전대책
조립.해체 작업 시 주의사항

2) 강관 틀비계 침하방지조치, 비계 및 벽이음 설치간격

① 강관 틀비계 조립 시 준수사항

비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며 밑받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것

높이가 20미터를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8미터 이하로 할 것

주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치할 것

수직방향으로 6미터, 수평방향으로 8미터 이내마다 벽이음을 할 것

길이가 띠장 방향으로 4미터 이하이고 높이가 10미터를 초과하는 경우에는 10미터 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것

② 비계의 침하방지 조치

지반은 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판은 평탄하게 설치한다.

되메우기를 한 장소나 연약지반에는 자갈 또는 콘크리트 등으로 보강하여야 한다.

받침철물은 깔판, 받침목의 중심에 정해진 기둥 간격 (1.8m이하)으로 배치하고 이동을 방지하기 위하여 못으로 3개소 이상 고정한다.

기둥의 이동 방지를 위하여 필요에 따라 밑둥잡이를 하부에 설치한다.

③ 받침철물

비계기둥의 밑부분에 붙여 비계기둥의 하중을 지반에 전달하는 장치, 고정형과 조절형이 있음

형 식	구 조	성 능
		높이조절 범위(cm)	수직하중에 대한내력(kg)
고정형	받침판의 두께 : 6mm 이상 면적 144cm2(단면 12cm 이상) 관의 끝면과 평면으로 접촉(중심부에 H=6cm이상 뾰족부분 구조 : 핀의 이동 방지) 받침판에서 지름 4mm 이상의 구멍 4개 상을 둠.	-	받침판의 하중 5,000kg 일때 홈이 생기지 않도록 한다.
조절형	받침판 크기, 형상, 구멍 뚫기는 고정형과 동일 크램프 기타 방법에 의해 관이 붙이는 상태로 관을 오르내릴 수 있는 구조	10cm 이상	5,000kg 이상

④ 작업발판 설치기준

항 목	설 치 기 준
표 지 판	최대적재하중표시(400kg이하), 위험경고 및 지시판 부착
안전난간	상부난간대(90~120cm이상), 중간에 중간대를 견고히 설치
작업발판	폭은 40cm 이상, 간격 3cm이하로 발판1개당 2개소 이상지지
발끝막이판	발끝막이판의 높이는 10cm이상
이 음 부	발판간 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선위에 놓일 것
재 료	발판은 폭40 cm 이상, 두께 3.5cm, 길이 3.6m이내의 것을 사용하여야 한다.

3. 안전시설물 설치계획

가. 개구부 안전시설물 설치계획

위 치	• AD, PD 등
해 당 공 종	• 전 근로자
유 해 위 험 요 인	• 내부로의 추락, 낙하물에 의한 하부근로자 재해
안 전 대 책	• 덮개재료 ∙ 강도상 현저한 결점(충식, 마디, 갈라짐, 부식, 휨)이 없는 두께 12mm 이상의 구조용 합판 사용 ∙ 콘크리트의 못을 사용하여 덮개 • 덮개 설치 ∙ 덮개의 허용하중은 덮개의 중앙위치에서 120kg 이상 지지 • 안전표지판의 설치 ∙“추락주의”, “개구부 주의”등의 표지판 설치
안 전 시 설 설 치 시 기	• 당해층 거푸집 해체 작업 완료 직후
안 전 시 설 존 치 기 간	• 당해 공종 마감전
첨 부 도 면 및 서 류	• AD, PD 안전시설 설치 계획도
기 타 주 의 사 항	• 작업형편상 부득이 제거하는 경우에는 작업의 종료 후 즉시 재설치 • 당일에 작업이 미완료된 개구부는 임시 폐쇄조치 후 익일 재작업

나. 각층 단부 안전난간 설치계획

위 치	• 단부 안전난간 등
해 당 공 종	• 형틀공, 철근공, 비계공, 조적공, 설비공, 마감공정 전근로자
유 해 위 험 요 인	• 추락재해
안 전 대 책	• 발코니 난간대 선시공 ∙갱폼 인양후 발코니 난간 선시공 ∙발코니 난간 보양을 위해 청탑지 설치 • 개구부에 안전표지판의 설치 ∙“추락주의” 등의 표지판 설치
안 전 시 설 설 치 시 기	• 해당층 거푸집 해체작업 완료와 동시에 설치
안 전 시 설 존 치 기 간	-
첨 부 도 면 및 서 류	• 슬라브단부 안전시설 설치계획도
기 타 주 의 사 항	-

다. 계단 안전난간 설치계획

위 치	• 계단 측면단부 등 (도면참조)
해 당 공 종	• 형틀, 철근, 조적, 미장, 마감공정 전근로자
유 해 위 험 요 인	• 계단에서의 추락 재해
안 전 대 책	• 안전난간 설치 ∙Φ48.6 t=2.4mm 강관, 브라켓 및 동등 이상의 재료 ∙상부난간 H1:450-600mm, H2:900-1200mm ∙난간 선해체후 버팀대를 해체, 해체작업시 안전대 착용 • “추락주의” 등의 표지판 설치
안 전 시 설 설 치 시 기	• 해당층 거푸집 해체작업 완료와 동시에 설치
안 전 시 설 존 치 기 간	• 해당층 난간 설치 직전
첨 부 도 면 및 서 류	• 계단 측면단부 안전시설 설치계획도
기 타 주 의 사 항	• 작업상 안전시설을 임시로 해체할 때에는 작업 종료후 즉시 재설치 • 난간 설치 높이 확인 • 접속부의 결속여부, 조기해체 여부 • 마감 공정시까지 난간존치

라. E/V PIT 벽면 개구부, 내부 작업발판 설치계획

위 치	• E/V PIT
해 당 공 종	• 형틀공, 철근공, 조적공, 미장공, 설비공, 전기공 등
유 해 위 험 요 인	• 추락, 낙하등의 재해
안 전 대 책	• E/V PIT 내부 작업발판은 슬라브 상부철근을 (@ 300)연장하여 설치 • 코팅합판 사용금지(미끄러짐 방지) • 안전표지판의 설치 ∙“추락주의”, “개구부 주의”등의 표지판 설치
안 전 시 설 설 치 시 기	• 지상층 거푸집 해체시
안 전 시 설 존 치 기 간	• ELEV. 설치전
첨 부 도 면 및 서 류	• E/V PIT 내부 작업발판 설치상세도
기 타 주 의 사 항	• 코팅합판 사용금지 • 합판과 철근의 결속상태

마. 안전시설물 설치도면

1층 안전시설물 설치도

2층 안전시설물 설치도

3층 안전시설물 설치도

4층 안전시설물 설치도

5층 안전시설물 설치도

옥상층 안전시설물 설치도

엘리베이터 개구부용 난간틀 상세도	계단 측면 안전난간 상세도
발코니 등 안전난간 상세도	AD,PD 등 개구부 덮개 상세도

	<대형개구부 덮개 상세도>
<E/V 내부 작업발판 설치 상세도>